SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Nazwa zadania:
Robota budowlana polegająca na rozbiórce pokryć dachowych zawierających płyty azbestowo-cementowe z terenu Gminy Nowosolna.

Zamawiający:
Gmina Nowosolna
z siedzibą Urzędu Gminy 
ul. Rynek Nowosolna 1
92-703 Łódź

I.	ROZBIÓRKA POKRYCIA DACHOWEGO Z PŁYT AZBESTOWYCH, WYWÓZ I UTYLIZACJA

1.CZEŚĆ OGÓLNA

1.1.Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
Robota budowlana polegająca na rozbiórce pokryć dachowych zawierających płyty azbestowo-cementowe z terenu Gminy Nowosolna.

1.2.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania rozbiórki pokrycia dachowego z płyt azbestowych, wywozu i utylizacji materiału z rozbiórki w budynkach należących do osób prywatnych położonych na terenie Gminy Nowosolna.

1.3.Zakres stosowania ST
Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

1.4.Określenia podstawowe, definicje.
Azbest inaczej zwany eternit jest nazwą ogólną i odnosi się do sześciu minerałów włóknistych z grupy serpentynów (chryzotyl) i amfiboli (amosyt,  termolit, krokidolit, aktynolit, antofilit). Minerały te są złymi przewodnikami ciepła a także są w miarę odporne na działanie czynników chemicznych.

Odmiany różnią się mechanizmami rozdrabniania się, ogólną respirabilnością, mają więc odmienny wpływ na zdrowie i życie ludzkie (rakotwórcze).

PODSTAWA PRAWNA
Rozbiórka pokryć azbestowo-cementowych winna być przeprowadzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z 2.04.2004 r. (Dz. U. nr 71, poz. 649) w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.

I.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY.
Prace winien zrealizować Wykonawca posiadający wszelkie atesty i uprawnienia do wykonywania tego typu prac.

II.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI PRZED ROZPOCZĘCIEM ROÓT ROZBIÓRKOWYCH
Przed przystąpieniem do demontażu Wykonawca jest zobowiązany sporządzić plan prac związany z wykonaniem robót. Powinny w nim zostać uwzględnione szczegółowe informacje o postępowaniu zmniejszającym narażenie pracowników i osób przebywających w pobliżu remontowanego obiektu na szkodliwe działanie azbestu. Taki plan musi się znajdować w dokumentach firmy przeprowadzającej demontaż. Przed wejściem na plac budowy pracownicy muszą mieć trzy dokumenty:
1.	Aktualne badania lekarskie,
2.	Zaświadczenie, że zapoznali się z oceną ryzyka zawodowego,
3.	Udokumentowane przeszkolenie w zakresie prac związanych z demontażem azbestu.
Niezależnie od tego przed rozpoczęciem prac zawsze musi zostać przeprowadzone szkolenie
przypominające zasady postępowania z wyrobami zawierającymi azbest.

Przygotowania.
Przed demontażem eternitu teren wokół domu (mniej więcej 3 m) powinien zostać wydzielony biało-czerwoną taśmą. Dodatkowo muszą zostać umieszczone tablice ostrzegawcze: „Uwaga! Zagrożenie azbestem”, „Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony” albo „Zagrożenie azbestem krokidolitem”.
Obowiązek ogrodzenia terenu prac i wywieszenia tablic ostrzegawczych spoczywa na firmie dokonującej demontażu, a także zastosowanie takich zabezpieczeń jak uszczelnienie otworów
okiennych i drzwiowych nie tylko w domu, w którym są prowadzone prace, lecz również w budynkach znajdujących się w bardzo bliskim sąsiedztwie – przylegających do strefy prac.
Wprawdzie wykonawca nie musi mieć własnych mierników wykrywających stężenie włókien
azbestu w powietrzu, ale powinien zlecić wykonanie takich badań powietrza na stanowiskach pracy specjalistycznemu laboratorium. Jeżeli stężenie włókien jest zbyt wysokie, należy doprowadzić do obniżenia go do dopuszczalnej normy. Ponieważ prace są przeprowadzane na
dachu, najskuteczniejszą i prostą metodą jest zraszanie powierzchni eternitu wodą lub wodą z
dodatkiem środka neutralizującego, który wiąże włókna azbestu.

Wyposażenie pracowników wykonujących rozbiórkę pokrycia dachowego z azbestu.
Pracownicy firmy wykonawczej winni chronić narażone części ciała, skórę przed włóknami
azbestu – muszą mieć:
•	kaski,
•	rękawice,
•	ochraniacze,
•	kombinezony ochronne
•	maski jednorazowego użytku ze Znakiem Bezpieczeństwa B.
Mają całkowity zakaz zdejmowania środków ochrony układu oddechowego w strefie zagrożenia. Nie mogą pić, jeść, palić papierosów. Nie mogą także przechowywać swoich rzeczy osobistych na terenie wydzielonej strefy.

Sposób przeprowadzania prac -demontaż
Ekipa powinna liczyć co najmniej cztery osoby – dwie na dachu i dwie odbierające, przygotowujące zdjęty eternit do transportu.
Pracownicy nie powinni dostawać się na dach przez wyłazy, ale wchodzić po drabinie. Dzięki
temu nie będą przechodzić przez budynek i wnosić na butach azbestowych włókien. Jedynie w sytuacji gdy dom nie jest jeszcze zamieszkany, zdemontowane i zapakowane wyroby (w paczkach nieuszkodzonych) zawierające azbest mogą być podawane przez otwory w dachu.
Jednak po zakończeniu prac trzeba pamiętać o dokładnym oczyszczeniu wnętrza domu z azbestowych włókien – najlepiej wykorzystując do tego celu podciśnieniowy sprzęt odkurzający z bardzo skutecznymi filtrami (99,99%).
Pokrycie dachu przeznaczone do usunięcia przez cały czas trwania pracy powinno być utrzymywane w stanie wilgotnym. Wystarczy, gdy będzie regularnie zraszane wodą – wtedy materiały zawierające azbest nie pylą i włókna nie unoszą się w powietrzu.
Demontaż wyrobów z azbestem powinien być wykonywany jak najostrożniej. Tam, gdzie jest
to możliwe, bez ich uszkadzania.
Wszystkie zdemontowane materiały – odpady – powinny być pakowane w folii z polietylenu lub polipropylenu o grubości co najmniej 0,2 mm. Następnie powinny być tak zamykane, aby
niemożliwe było przypadkowe otwarcie paczki – zgrzewane albo zaklejane taśmą klejącą.
Później wszystkie pakunki powinny zostać oznakowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 14 sierpnia 1998 r. Etykiety muszą być trwałe, aby nie uległy zniszczeniu na przykład pod wpływem niekorzystnych czynników atmosferycznych.
Przed załadowaniem worków z odpadami na samochód jego skrzynia ładunkowa powinna być oczyszczona i najlepiej wyłożona folią, aby zabezpieczyć worki przed ewentualnym uszkodzeniem. Koncesjonowany wykonawca ma obowiązek wystawienia karty przekazania odpadów. Tak przygotowane są wywożone na specjalne składowiska.
Po zakończeniu prac Wykonawca ma obowiązek uprzątnięcia terenu z pozostałości azbestu.
Powinien zastosować czyszczenie na mokro albo podciśnieniowy sprzęt odkurzający.

ODBIÓR ROBÓT
Na koniec prac przeprowadza się badanie stężenia włókien azbestu w powietrzu – dostarcza protokół badania laboratoryjnego z badań przeprowadzonych na zlecenie Wykonawcy w laboratorium lub z badań mierniczych dokonanych własnym atestowanym sprzętem Wykonawcy.

PODSTAWA PŁATNOŚCI
•	zawarta umowa ryczałtowo – ilościowa Zamawiającego z Wykonawcą,
•	końcowy obmiar i kosztorys powykonawczy z cenami jednostkowymi robót, przy zwiększeniu ilości robót objętych umową,
•	końcowy obmiar z kosztorysem powykonawczym z cenami jednostkowymi robót, przy ewentualnym rozszerzeniu zakresu rodzaju. robót z zawartą umową na roboty dodatkowe,
•	protokół odbioru robót.